부산과학기술대학교 도시형생활주택형 기숙사 신축공사 설계용역

과  업  지  시  서

2016. 7. 8.

부 산 과 학 기 술 대 학 교

		목 차 Ⅰ. 과업의 개요 1. 과업명 4 2. 과업의 범위 및 내용 4 Ⅱ. 일반지침 1. 과업수행 일반지침 4 2. 보안사항 5 3. 용역 변경 5 4. 업무협의 및 공정보고 6 Ⅲ. 세부지침 1. 지형현황측량 7 가. 과업의 범위 7 나. 일반지침 7 다. 세부지침 7 2. 기본설계 8 가. 과업의 범위 8 나. 일반지침 8 다. 세부지침 8 3. 실시설계 9 가. 과업의 범위 9 나. 일반지침 9 다. 현지조사 및 답사 9

		라. 수리, 수문 조사 9 마. 지장물 및 구조물 조사 9 바. 계획 업무 9 사. 설계 업무 10 아. 설계도서 작성 17 자. 관계기관 협의 및 인.허가 17 차. 기타사항 17 Ⅳ. 성과품 작성 1. 성과품 납품 18

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과   업   명

부산과학기술대학교 도시형생활주택형 기숙사 신축공사 설계용역

2. 과업의 범위 및 내용

가. 공간적 범위

1)

지 번	면 적(㎡)
부산 북구 구포 3동 831 - 17	119
부산 북구 구포 3동 831 - 19	193
부산 북구 구포 3동 831 - 48	706
부산 북구 구포 3동 831 - 50	361
부산 북구 구포 3동 870 - 27	595
부산 북구 구포 3동 1262 - 44	187.3
합계	2,161.3000

2) 대지면적 : 2,161.3000 ㎡

3) 건물규모 : 예상 연면적 3,300㎡이내

◦수용인원 : 150명 (2인실 65EA, 1인실 20EA) 범위내외 유동적

계획 가능.

◦단위세대 면적기준 : 1인실 22㎡이상  2인실 26㎡이상

나. 시간적 범위

1) 설계용역기간은 계약일로부터 80일까지로 한다.

2) 용역 기간 이후라도 우리대학교가 요구하는 각종서류의 보완 및 제출           과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행           한다.

다. 과업의 내용

1) 과업의 기본방향

◦ 계획안은 기본 계획안을 만들어 협의/보고한 후 최종 안을 결정하고            실시설계를 실시하도록 한다.

2) 과업내용

◦ 부산과학기술대학교 도시형생활주택형 기숙사 신축공사 설계

Ⅱ. 일반지침

1. 과업수행 일반지침

가. 본 과업은 상위계획인 국토종합계획 등 토지의 이용에 관한 계획과의       관련 여부와 연계성을 검토하여야 하며, 부산광역시, 부산북구청 등과       기타 법령에 의한 제반계획 및 관련계획을 검토 후에 계획을 수립한다.

나. 수급인은 과업지시서와 관계법령 및 제규정 등에 따라 성실하게 과업       을 수행하여야 한다.

다. 용역수행은 본 과업지시서 내용에 따르고, 과업지시서에 명시하지 않은       사항에 대해서는 정부 관련법령 및 각종 시방서에 따라 본교와 협의하여 처리         한다.

라. 과업을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 계약관련 업무내용을        확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하여 지적사항을       시정하여야 한다.

마. 수급인은 이 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한       모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

바. 수급인은 기본설계안 선정 보고회에 필요한 제반서류 및 도서를 성실       히 본교에 제출하여야 하며 본교일정에 맞춰 보고회에 참석하여야 한       다. 또한 보고회의 지적사항에 대하여 면밀히 분석하여 조치계획을 보       고하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

사. 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 본과업의 일부 또는 전부를       거절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

아. 과업내용서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우 본교와 수급인이 협의        하여 결정한다.

2. 보안사항

가. 수급인은 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 수급인의       과실이나 부주의로 인해 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

나. 모든 성과품은 수급인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시       켜서는 안된다.

다. 과업 폐기물은 소각 처리하여야 한다.

라. 참여기술자가 교체될 시는 인계인수를 철저히 하여야 한다.

3. 용역변경

가. 용역수행 중 설계변경사항이 발생하였을 경우에는 관련법규 및 기술용         역계약 일반조건에 따른다.

4. 업무협의 및 공정보고

가. 정기 공정보고 및 수시보고

수급인은 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 주월간 공정보고를 매주          수요일을 기준으로 하여 본교에 제출하여야 하며, 본교의 요구가 있을          시 수시로 보고하여야한다.

1) 과업추진내용 및 공정현황

2) 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

3) 업무관련회의 및 본교 지시사항 처리결과(승인사항포함)

4) 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

5) 다음 주 과업수행 계획 등 과업에 관련된 내용

다. 중간 및 최종보고

수급인은 본교의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련자료를            제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 한다.

1) 기본 계획안 선정을 위한 보고회 : 기본 계획안구상 완료시

◦ 형 식 : 기본 계획안 보고회(프리젠테이션)

◦ 내 용 : 기본계획안(조감도 포함) 제출

2) 1차 중간보고 : 기본설계구상 완료시

◦ 형 식 : 간담회 형태

◦ 내 용 : 기본설계도서 제출

3) 2차 중간보고 : 실시설계 기본계획 완료시

◦ 형 식 : 간담회 형태

◦ 내 용 : 기본설계도서 제출

4) 최종보고

◦ 일시 : 최종성과품 납품 15여일 전

◦ 형식 : 간담회 형태

◦ 내용 : 실시설계도면 및 공사비내역서

5. 시행 및 비용부담의 한계

가. 다음 각 호에서 언급한 사항은 수급인의 비용으로 시행한다.

1)「건축사의 업무범위와 대가기준」내 에서 정한 업무에 소요되는 비용

2) 본 과업지시서의 인허가 및 인증 취득에 소요되는 비용(수수료 포함)

3) 기타 본 과업지시서에서 설계용역 수급인이 당연히 수행해야 할 업무에         소요되는 일체의 비용 등

나. 한국전기안전공사의 사용 전 검사수수료 및 관련 법규,조례,기준,규칙,          고시 등에 언급되는 모든 비용은 본 설계에 반영한다.

다. 수급인은 법령의 개정, 설계누락, 기타 변경사유 등으로 본교로부터 설          계도서의 수정 및 보완, 변경 등의 요청이 있을 경우 변경도서를 본교          에 제출하여야 하며, 이로 인하여 발생되는 모든 비용은 본교 사유가          아닌 경우 수급인이 부담한다.

Ⅲ. 세부지침

1. 지형현황측량

가. 과업의 범위

◦ 사업대상지 : 부산광역시 북구 구포3동 831-17번지 일원

◦ 면  적 : 2,161.3000㎡

나. 일반지침

1) 현황측량은 공공측량 작업규정에 의하여 성과품을 제출하여야 한다.

2) 본 과업지시서에 명시하지 않은 사항이라도 본 과업 수행상 필요한          것은 본교의 지시에 의거 수급인이 시행하여야 한다.

3) 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

◦ 각도는 도‧분‧초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

◦ 각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범         위 내에 들어야 한다.

◦ 현황측량은 지적경계 측량을 실시 한 후 도근점에 의하여 실시하되          수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상공작물 및          주요지점을 표시하고 등고 선은 최소 1m 간격으로 표시하여야 한다

◦ 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

4) 현황도와 지적도를 별도로 작성하고 오버랩하여 지적도와 지형도가          일치되도록 하여야 한다.

5) 측량에 사용된 원점은 검측에 필요하도록 영구지물에 표시하여 두어         야하며, 이를 보고서에 수록하여 두어야 한다.

다. 세부지침

1) 도면작성 및 계산

◦ 도면작성 : 수급인은 지형도상에서 지적이 삽입된 종합도 외에 지적       도 및 용지도를 별도로 작성하여야 한다.

◦ 컴퓨터를 이용한 종합적인 분석 및 계획을 위해 지형 및 지적이 입       력된 CAD용 도면을 별도로 작성 ‧ 제출해야 한다.

◦ 각종 계산은 소정양식에 의하여 실시하되 도상 지구계는 좌표로서        결정하여야 한다.

2) 지장물 조사

◦ 계획구간의 각종 지하매설물 ․ 지상시설물은 현장조사 및 해당기관이       작성한 도면 및 자료를 조사하여 저촉여부 등을 현장에서 확인․조사       하여 설계에 반영하여야 한다.

◦ 건물, 전신주 등 기타 각종 지상시설물과 맨홀, 상하수도, 가스관 등       각종 지하시설물은 계획안에 따라 존치, 이설, 폐기 등으로 구분하여       설계에 반영하고 이에 따르는 공사비를 산출한다.

◦ 공사 시 터파기 등으로 인하여 보호공이 필요한 시설물에 대하여는

관리기관과 협의하여 적절한 보호방안을 수립, 공사 중에 손상이 없

도록 계획하여야 한다.

◦ 측량현황도에 각종 지장물의 위치를 현지와 정확히 일치되도록 표시

하되 누락되거나 과다 산정되지 않도록 하여야 한다.

2. 기본설계

가. 과업의 범위

◦ 사업대상지 : 부산광역시 북구 구포3동 831-17번지 일원

◦ 예상연면적 : 3,300㎡

나. 일반지침

1) 본교에서 제시하는 요구사항과 설계용역 계약자의 창의성을 바탕으            로서 배치, 평면, 입면, 단면, 구조 등의 기본적인 내용을 설계도서            에 표시함.

다. 세부지침

1) 기본설계안을 작성하여 기본설계안 선정을 위한 보고회를                       실시하며 보고회에 필요한 도서자료의 작성에 만전을 기하며 보고              회의 지적사항에 대해서는 적극적으로 수정, 보완한다.

3. 실시설계

가. 과업의 범위

◦ 사업대상지 : 부산광역시 북구 구포3동 831-17번지 일원

◦ 예상연면적 : 3,300㎡

나. 일반지침

1) 각 공종별 모든 설계서는 선정된 기본설계안을 기준으로 작성하여야            한다.

다. 현지조사 및 답사

1) 해당 계획 지역에서의 지형, 지장물, 식생, 토지이용 상황을 파악․확인           하여야 하며, 또한 측량을 실시하는 경우 수급인은 조사계획을 작성           하여 본사에 제출하여야 한다.

2) 현지답사를 하여 계획지역의 지형, 지물, 각종시설물, 식생, 토지이용           상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진 등을 이용하여 과업수행에            유용한 자료를 작성한다.

라. 수리, 수문조사

1) 계획지역 인근의 배수로, 및 산림현황 등을 조사하여 안전성을  검토           하여야 한다.

2) 도시가스 유입시설과 배수시설 등 유지관리시설 현황을 조사한다.

마. 지장물 및 구조물 조사

◦ 계획시설물의 설계 및 시공에 영향을 미치는 각종 지하매설물과 지상           시설물 및 장애물을 조사하여 설계에 반영하여야 한다. (전기, 통신,            상․하수도 등)

바. 계획업무

1) 관련계획 검토

◦ 기본설계안을 검토, 분석하여 조사, 계획, 설계업무의 각 결과치를

실시설계에 최대한 활용하여 만일 조정이 필요한 경우 발주자의 승인           을 받아 변경하도록 하도록 한다.

2) 주요구조물 계획

가) 각종 구조물은 다음과 같은 요소의 장단점을 비교․검토하여 구조와             형식을 결정하여야 한다.

◦ 경제성(공사비, 유지관리. 내용연수 등의 적정성)

◦ 시공성(작업공간 확보 및 민원 최소화 등)

◦ 기능성, 안전성, 미관성 등

나) 주변시설 및 인근 주민에 미치는 소음, 진동은 최소화 하고 주변              환경오염이 되지 않는 공법을 검토한다.

3) 계획기준 작성 및 기타

가) 계획 구간의 지역여건, 공사량, 공사현장 관리의 효율성, 주요 구조             물, 공사시행 여건 등을 종합 검토하여 효율적인 사업추진이 되도             록 하여야 한다.

나) 본 과업 수행에 필요한 각종 설계기준 조건을 작성하여 상세 설계             서에 사용하도록 한다.

다) 상기사항은 발주자의 검토를 거쳐 확정한다.

사. 설계업무

1) 설계조건

가) 각 분야 설계시 관련법에 의거 반드시 유자격자가 설계하도록 하고             도면작성은 측량성과품을 이용한다.

나) 기본계획이 충실히 반영될 수 있도록 설계한다.

다) 일반적인 설계방법, 시방서 및 지침 이외의 특정한 사항이 요구되             는 경우에는 반드시 발주자가 요구하는 설계방법, 기준, 국토교통부            표준시방서 및 지침 등에 대해 기재한다.

라) 각 공종별 주요자재 및 재료의 기준을 기재한다.

마) 경제적인 시공비를 고려한 창의적인 설계안을 제시한다.

2) 지형설계

가) 현황 및 분석도면을 준비하여 필요한 사항을 점검한다.

나) 기존 구조물의 마감, 바닥의 고저 등을 고려하여 지반의 안정과 적             절한 배수가 보장되도록 지형을 변경한다.

다) 기존 지형의 경사나 침식의 정도를 파악하여 노변 비탈면의 적절한             경사를 정한다.

3) 토공 및 정지설계

가) 절토 및 성토부의 기울기는 지반조사결과를 토대로 사면안정성을              검토하여 반영하여야 한다.

나) 지반의 보강이 필요한 구간은 보완대책을 강구하여야 한다.

다) 시설물 철거가 수반될 시 순서, 방법, 안전대책을 수립하여야 한다.

라) 토공설계는 가급적 본 대상지의 단거리내에서 절․성토량을 동일하             게 하는 것을 원칙으로 하며, 토량균형이 불가능한 경우 토취장 및             사토장을 본사와 협의하여 결정한다.

4) 포장공 설계

가) 포장설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등에 관한 기초자료를 근거             로 포장공법 및 포장 두께를 결정한다.

나) 포장재는 경제성과 내구성이 있고, 환경친화적이며 미적으로 수려             하여야 한다.

다) 보도는 장애자를 위한 시설도 병행 검토하여야 한다.

라) 포장 구조는 종류별 표준 구조도를 작성한다.

5). 건축설계

가. 건축분야

○ 일반사항

- 본 설계지침은 “제안자”가 본 설계지침의 내용보다 더욱 발전적인 계획안(案)을 제시할 경우 발주자와의 협의를 거쳐 수용할 수 있음

○ 배치계획

1) 계획시에 시설의 용도 및 입지조건 등을 충분히 파악하여 효율적인   대지의 이용 및 개방감을 확보하여 공공시설로써 공간제공 및 주변   여건과 최대한 조화롭게 배치 계획을 한다.

2) 성토/절토량을 최소화하고 경사지에 대하여  대지Level을 최대 이   용한 건물배치 등의 설계가 되도록 하여 부지조성 공사비를 최소화   하도록 하여야 한다.

3) 지형 및 일조, 조망, 풍향 등 대지조건을 획일적인 공간계획을 탈피   하고 주변시설의 훼손을 가능한 줄이고 외부진입로 및 공간을 조화   있게 한다.

4) 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용 및 안전에 우선되어야 하며 보   행자 동선과 차량동선의 교차부분이나 차도로 인한 분리시에는 보행   자 및 장애자 우선으로 하여 통행에 지장이 없도록 부지의 연계성을   최대한 고려하여 계획하여야 한다.

5) 보행자 동선외에 장애자를 위한 램프 등을 고려하여 출입에 지장이            없도록 한다.

6) 부지내 진입로 및 보도, 녹지 등 교차점 가각부는 곡선으로 처리하   고 가각전제는 관련기준에 적합하여야 한다.

○  평면계획

1) 21세기를 지향하는 현대적인 시설과 신기술, 신자재, 신공법을 도   입하여 안정성을 확보하고 합리적이고 경제적인 건물이 되게하고    미래 수요증가에 따른 각종 시설 수용을 고려하여 설계한다.

2) 불필요하거나 과다한 OPEN SPACE를 가급적 억제하고 업무시설     자료유출, 안전사고, 해충접근방지, 통풍 등을 고려한 계획이 필요.

3) 층별 실별 고려사항

거주자의 동선을 최소화하여 관리를 쉽게 하고 필요시 적절히 변      경 사용토록 가능하여야 한다.

4) 장애자, 노약자를 위한 시설 확보 : 완공 후 장애자 시설을 별도       로 하는 일 없이 사전에 면밀히 검토하여야 하며, 중요한 시설 경      사로, 층간 이동시설, 점자블럭, 화장실 설치 및 안내표지판 설치       등을 고려하여 설계할 것

5) 편안하게 쉬고 싶은 시설로 옥외 휴게공간(테라스시설 등)을 계획      하여 일사, 조망,우수 등을 고려하여 설계할 것.

6) 관리상의 효율과 더불어 이용자의 편리와 안전, 편안함을 고려하여      각층의 용도와 시설의 규모를 확정하고 벽체의 재질 및 두께 등       기본적인 재료를 정한다.

7) 로비 등에 대하여는 최대한의 개방감을 확보토록 한다. 각층 공용              공간등에 소음을 차단할 수 있는 스터디 룸 형태의 학생 휴식공간              일부 확보

8) 로비 등 공용공간의 디자인 및 구성은 층별로 달리하여 각 층마다

차별화된 공간연출을 구성한다.

9) 단위호실 최상층은 4m 이상으로 실내복층 형태로 구성한다.

10) 각 실간의 융통성을 부여하여야 한다.

11) 실내 마감은 여학생 취향에 맞는 미니멀 컨셉을 도입하며 소음

등으로 인한 방해 등이 발생하지 않도록 충분한 고려를 하여야

한다. (소음은 학생 만족도 조사에서 가장 불만족 항목임)

12) 현 계획부지 인근 제2생활관(여자기숙사)과 연결통로를 설계에

반영

13) 각 단위호실은 도시형 생활주택기준의 기능을 충족할 수 있는

내부시설을 반영

(주방시설, 화장실시설, 붙박이장, 냉난방, 세탁기 등 )

14) 기숙사(원룸형)의 특이성을 감안하여 1인기준 싱글침대 1, 책상               1개의 가구배치를 고려하여 계획

15) 피난(대피)시뮬레이션을 통한 안전 제고

16) 1층은 수위실 1개소, 공용 화장실 1개소(2인 사용기준) 배치

○ 입면계획

1) 부산과학기술대학교의 이미지와 상징적 역할을 할 수 있도록 현대적      이미지 및 독창적인 외관을 구성하고 예술성 있는 계획을 한다.

2) 학생에게 친밀감을 주며 이용자들에게 개방적인 입면계획을 한다.

3) 전체적으로 안정감 있는 규모계획으로 균형미가 있도록 하고 통일감을          확보한다.

4) 외장재는 주위환경과 조화를 이룰 수 있는 색감과 질감을 선택하되 가    급적 품위를 유지할 수 있고 이질감이 없도록 색채 계획한다.

○ 구조계획

1) 적재하중 및 각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계   획을 하여야 하며 건축법 및 건축물의구조기준등에관한규칙, 건축물의   하중기준등 관련규정에 적합하게 하여야 한다.

2) 기본구조는 장래증축(수직 또는 수평)을 고려하여 증축이 가능한 부분   에 대한 구조기준적합성 등을 고려하여  구조설계를 한다.

○ 색채계획

1) 건물 외관은 주위환경과의 조화 및 학교 이미지를 고려한 외장재선택

2) 내부 공용공간은 층별로 컨셉 및 색채계획을 달리하여 각 층마다의

차별화된 공간연출을 목적으로 한다.

3) 내부 단위세대 색채는 여자기숙사의 특성을 감안한 색상을 적용하되

단위호실(1인실,2인실)별로도 구성을 달리한다.

나. 전기․통신 및 소방분야

○ 일반사항

1) 경제성, 기능성 및 안정성이 있고 융통성 있게 계획할 것.

2) 시설물 유지관리․ 보수 및 안전관리가 용이할 것.

3) 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적설비방식을 추구한다.  .

4) 장차 부하 변동에 따른 신축성이 있는 계통을 구성할 것.

5) 고장이 적고 고장시 수리 교환이 용이한 구성으로 할 것.

6) 기술 진보에 따른 빌딩 자동화 등에 효과적으로 대처할 수 있는 것.

7) 건물의 설비는 효율성, 안정성, 경제성, 적응성, 운영성 등 각 용도에    맞게 계획하여 설비의 고도화 및 자동화를 통해 공사비와 유지비가     절감되도록 계획한다.

8) 건물 목적에 부합되고 건물에 최적화 된 시스템을 도입(사무자동화,     건물자동화, 정보통신, 보안부분)들을 첨단기술로 통합하여 건물내부    사용자측의 편의와 능률 극대화 도모할 수 있는 인텔리전트 시스템     을 도입을 고려할 것.

9) 도면구성에서 평면도만 단편적으로 구성하여 전체의 이해가 어려우므    로 공사의 전체를 쉽게 파악할 수 있도록 전체의 일반도 및 간선계통    도 등 연관되는 도면을 작성한다.

10) 전력인입설비 및 전화설비 등의 책임분계점의 위치를 명확히 하고 공    사한계도(특히 한전주에 시설하는 것과 한전시설 위치)를 확실하게     설계한다

11) 소방, 전화 등의 부하설비는 운영관리, 시공 및 사후관리, 보수 등의     편리성을 감안하여 용도, 설치장소 등을 분류하여 합리적인 방법을 택    하여야 한다.(EPS 설치 등)

12) 자동제어설비 전기제어는 수전설비의 역률, 전압, 전류, 전력량 등 모    니터링 및 일지작성 기능을 수행하도록 한다

13) 모든 수배전 기기는 수배전반에 내장하고 변압기는 몰드형으로 사용    하고 각종 차단장치 보호 및 계측설비를 설치하여 시설물을 보호하고    유지관리가 용이하도록 시설되어야 한다.

14) 비상조명설비, 비상발전기설비, 축전지설비, 방송설비, 옥외 가로등설    비, CCTV 설비, OA 설비(정보서비스, 관리, 일반사무처리기능 등)     등을 시설하여야 한다.

15) 관련 제 법규에 규정을 준수 할 것.

16) 설비공간(실외기등)이 외붕 노출되는 것을 배제하고 기능을 만족할            수 있도록 계획

17) 전기, 가스 등은 원격검침을 고려하여 계획

18) 승강설비는 이용의 편의를 위해 17인승 2대이상 고려

○ 전력간선설비

1) 각층에 분전반을 설치하고 분전반은 부하의 중심점에 설치한다.

2) 간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락시 허용전류     등을 고려하여 결정할 것.

3) 간선설비는 안전성, 효율성 및 장래 부하설비 증설을 고려하여 간선의    구성 및 용량을 결정할 것.

4) 배전전압은 3상4선식 380V/220V로 계획하고 간선의 길이는 가급적    최단 거리가 되도록 한다.

5) 소방설비와 관련된 간선은 내화, 내열, 케이블을 사용 할 것.

6) 수배전반은 폐쇄형으로 할 것.

7) 동력변압기와 전등변압기는 분리하여 설치할 것.

○ 전등설비

1) 건축물의 각 실 용도에 적합한 광원과 등기구 종류와 각 실에 맞는 적   정조도(KSA 3011)로 설계 할 것.

2) 눈의 피로 및 보호를 위하여 균제도가 0.4이상일 것.

3) 에너지이용합리화법 제3조 규정에 의한 고효율 에네지 기자재사용

4) 창가측 조명은 별도 점멸스위치 회로를 구성하여 에너지 절약을 고려 할 것.

5) 매입 조명기구의 설치 위치에 타설비 또는 덕트배관 등 장애물을 감안   하여야 하므로  건축층고, 높이 설계시 천장부분의 충분한 설치공간 확   보반영.

6) 가급적 조명기수 종류수를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자   재 확보의 편의성을 고려 할 것.

7) 옥외 보안등은 조경과 건축물 주변여건 등 미관을 고려할 것.

8) 각 실의 조도는 실의 조도 및 용도, 쾌적한 시야, 분위기 조성 등을    면밀히 고려하여야 하며, 기준에 적합하게 설계하도록 하고 고효율 조   명기구를 사용토록 한다.

○ 전열설비

1) 전열 1회로당 최대 수구수는 5개 이하로 설계하고 용도별로 구분

2) 일반용 수구는 220V 접지형 차단기를 사용 할것.

3) 수구부하의 용량값은 150VA/EA로 하며 분기회로는 용량의 80%를     초과하지 않도록 할 것.

4) 수구의 사용전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분 및 사용이 가능하게          분류 할 것.

○ 소방설비

1) 소방법 적법하게 설계

2) 유도등 및 유도표지의 설치대상과 장소가 적합하게 할 것.

3) 비상조명등 설비 설치대상 중 면제 또는 누락부분에 해당되는지 여부          를 확인

4) 유도등간의 배선은 3선식으로하며 배선은 내열전선을 사용토록 할 것.

5) 자료실부분은 가스소화방식을 고려

○ 통신설비

1) 기능에 맞게 실에 통신(전화, LAN)망을 구축 하여야 한다 .

2) 구내 통신선로설비 또는 이동통신 구내설로설비는 그 구성과 운영에     있어 사업용 전기통신설비와의 접속이 용이하도록 할 것.

3) 구내 통신선로설비에는 구내로 인입되는 국선의 수용, 구내 회선의 구    성 및 단말장치 등의 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보할 것.

4) 예비회선수를 20%이상 확보할 것. 다만, 이를 수용할 수 있는 배관시    설이 확보되는 경우에는 그러하지 아니한다.

5) 구내 통신선로설비 또는 이동통신 구내 선로설비를 구성하는 배관시설    은 설치된 후 배관의 교체나 증설 시공이 용이한 구조로 설치 할 것

6) 방송시설은 층별 실의 용도별로(화장실 라인분리) 구분하여 방송할 수    있도록 구성한다

7) 구내방송과 연계하여 비상유도방송설비가 될 수 있도록 한다.

○ 공시청 설비

1) TV 전계강도는 최종간 수구까지의 전계강도가 70db 이상이 되도록           설계할 것.

2) 유선방송용 예비관은 전화관로에 병행하여 확보할 것.

3) CATV 또는 위성방송을 고려한 경우에는 옥탑에 Cable Head End를          설치 할 것.

4) 간선은 7C-HFVT, 분기선은 5C-HFVT동축케이블을 사용.

5) 층간 TV 증폭기함을 설치

6) TV 공청설비는 공중파방송 위성방송(스카이라이프) 및 유선방송 등   을 고려하여 CATV SYSTEM 구성한다

○ 방재설비

1) 소방법, 건축법 및 기타 법규에 준하여 설계할 것.

2) 자동화재경보 주수신반은 근무자가 상시 근무하는 장소에 설치할 것.

3) 유도등(피난구, 통로)은 실 용도 및 소방법에 적합한 규격을 알맞은     장소에 설치할 것.

4) 감지기는 연기감지기, 정온식, 차동식 및 기타 소방법 규정에서 정한    적합한 감지기로 설치할 것.

5) 유도등의 배선을 3선식으로 하고 배선은 내열전선을 사용한다.

6) 건물 요소요소에 안전사고 대비와 자료훼손, 유출 방지목적으로

CCTV를 설치하고 모니터는 자료실 카운터와 안내데스크 등 적절한    장소에 설치하여 모니터링 하도록 설계

○ 건물의 방수공법(방안)

아. 설계도서 작성

1) 설계서 작성 기준

가) 과업수행에 필요한 각종 설계기준, 편람, 지침, 시방서는 국토교통             부 및 부산광역시, 부산북구청기준에 적합하도록 작성하여야 한다.

나) 설계서의 작성순서 및 요령은 2016년 건설표준품셈에 의거 작성한다.

다) 도면상의 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명한다.

라) 시방서는 분야별, 공종별로 세분하여 작성하고, 설계도상에 기재되             지 않은 일반사항과 특수공법을 요하는 것은 특별시방서에 상세히             기록하여야 한다.

마) 자재단가는 물가정보 등 물가조사업체 자료 3개 이상의 단가 중 최             저가를 적용하고, 거래가격이 형성되지 않는 품목은 3개 이상 생산             업체 원가 조사서가 첨부된 견적서를 받아 가장 합리적인 단가를              적용하여야 한다.

바) 모든 공사비는 최근 건설공사표준품셈에 준하여 작성하고, 표준품             셈이 적용되지 않는 공사비 내역서는 산출근거를 명확히 제시하여             야 한다.

사) 설계도서에 각종재료를 표시해야 하고 도면의 작성은 CAD 작업을             원칙으로 한다.

자. 관계기관 협의 및 인∙허가

◦ 수급인은 본 과업과 관련하여 관련기관의 인․허가에 필요한 서류를

작성하여 제출하여야 하며 대관업무를 수행하여야 한다.

차. 기타사항

1) 본 과업수행 기간 중 과업수행자는 주요시설 등에 대하여 관련전문가           와 협의를 실시하여 본 과업을 수행하여야 한다.

2) 과업수행자는 과업수행기간 중 본교직원의 의견수렴을 하여야 하며,            수렴된 의견을 적극 반영토록 하여야 한다.

Ⅳ. 성과품 작성

1. 성과품 납품

○  성과품 작성에 있어서 시공상 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여     작성하며 다음 수량을 원칙으로 하되 발주처의 필요시 증감할 수 있다.

구 분	규 격	수 량	비 고
사업추진일정표	A1	5부
설계서(내역서)	A4	5부	총괄표 포함
수량 및 단가산출서	A4	5부
	A1(백상지)	1부	협의가능
설 계 도 면	A3(평철)	5부
	A3(반책)	5부
공사시방서		5부
조 감 도		1식
구조계산서	A4	5부
지질조사보고서	A4	5부
준공도서	A3	1식	USB포함
인허가 관련도서		1식
USB		1 EA